상하수도사업소

	목 차

□ 정책방향 432 □ 일반현황 433 □ 2023년 추진성과 및 반성 434 □ 2024년 업무계획 435 1. 주민에게 신뢰받는 수도행정 서비스 제공 435 2. 안정적인 생활용수 공급 436 3. 공공하수처리시설 효율적 운영 및 관리 437 4. 하수처리구역 확대를 통한 생활환경 개선 439 □ 2024년 역점시책 442 1. 식수 전용 저수지 신설 442 계속 2. 영광 제2정수장 개량 443 계속 3. 법성정수장 개량사업 444 신규 4. 영광군 스마트 관망관리 인프라 구축 445 계속 5. 송이도 공공하수 외2개소 노후시설 개량사업 446 신규 6. 영광읍 하수도정비 중점관리지역 정비 447 공모 계속 7. 영광 공공하수처리시설 증설 448 계속

	2024년 정책방향
	(상하수도사업소)

	군 정 여 건
❍ 생활밀착형 수도 행정서비스 제공을 통한 정주여건 개선 ❍ 가뭄대비 안정적 수원 확보 및 노후 시설 개선으로 맑은 물 제공 ❍ 철저한 공공하수처리시설 운영관리와 하수처리 효율성 향상 ❍ 하수관로 정비를 통한 수질오염 방지 및 주민 공중위생 향상

	전 략 목 표
맑고 안전한 물 공급, 쾌적한 생활환경 조성

	중 점 시 책
❍ 주민에게 신뢰받는 수도행정 서비스 제공 ❍ 안정적인 생활용수 공급 ❍ 공공하수처리시설 효율적 운영 및 관리 ❍ 하수처리구역 확대를 통한 생활환경 개선

	일반현황
	(상하수도사업소)

□ 조  직: 4팀

□ 인  력: 37명(공무원 21, 공무직 16)

(정원/현원, 2024. 1. 1.기준)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타	공무직
22 21	- -	1 1	4 7	8 4	8 3	1 6	- -	17 16

□ 주요기능

구 분	담 당 업 무
관리팀	○ 상하수도 공기업 특별회계 예산 운영 및 결산 ○ 계약, 물품 지출, 처분 및 자산관리 ○ 상하수도사용료 부과 및 징수
상수도팀	○ 지방상수도 중장기계획 수립 및 물 관리 종합대책 ○ 상수도 신설, 개량 및 보수 ○ 수원지 취수시설, 정수장 등 상수도 시설 관리
하수도운영팀	○ 공공하수처리시설 운영 관리 ○ 하수·분뇨 수질분석 및 실험실 운영 ○ 중계펌프장 운영관리
하수도시설팀	○ 하수도 기본계획 수립 ○ 하수관로 보수 및 유지관리 ○ 하수도 시설물 보수 및 유지관리

□ 2024년 예산규모

(단위: 백만 원)

합계	일반회계	특별회계	기금
45,422	536	44,886

2023년 추진성과 및 반성
	(상하수도사업소)

주요성과

	《 수상 및 공모사업 》
￭ 2023년 워터저널·국회환경포럼 재난 극복 최우수기관 수상

□ 생활밀착형 수도행정 서비스 제공

○  상하수도요금 문자 알림 서비스 시행: 5,529 수용가 신청

○ 취약계층 옥내누수 보수 공사 지원: 6건 180만원

□ 정수장, 배수지 유지관리 및 상수도 시설 개선으로 안정적 용수 공급

○ 정수장 여과사 교체 작업(4개소): 161백만 원

○ 광역1배수지 물탱크 교체(물탱크 500톤 1식): 220백만 원

○ 노후상수관망 정비: 관망정비(L=32.1㎞), 블록구축공사 완료

□ 가뭄피해 복구분야 전국 최우수기관 수상

○ 재난안전 특별교부세 확보로 복룡제 관정 개발 등 수원지 용수 확보

○ 영산강유역환경청 등 유관기관과 물 절약 합동캠페인: 14회

- 변기 1.8L 페트병 설치(1,000개소), 절수기기 설치‧지원(538개소)

- 유동인구가 많은 지역에 전단지 배포(20,000부), 현수막 게첨(145개소), 전광판 영상송출(4개소)

□ 공공수역 수질보전을 위한 효율적인 하수처리장 운영

○ 영광 공공하수처리시설 노후기계설비 개선사업 : 저장호퍼 2대,

악취탈취기 1식, 기타 부대설비 교체 완료

반성과 교훈

□ 상하수도 관련 대규모 사업 추진 지연(신속집행 차질)

○ 당해 예산 확정 후 행정절차 및 실시설계 용역 추진으로 사업 지연

→ 예산 확정 전 실시설계용역 발주 및 행정절차 신속 이행하여 상반기 내 사업 발주(사업기간 단축 및 신속집행 추진 기여)

	2024년 업무계획
	(상하수도사업소)

1		주민에게 신뢰받는 수도행정 서비스 제공
		상하수도사업소장 강무성/ 관리팀장 안수인(☎ 5901)

◈ 상하수도요금 납부율 증대와 누수공사 시행으로 군민의 편의 도모

◈ 군민이 만족하고 신뢰하는 수도행정 서비스 제공

□ 수도행정 서비스 지원

❍ 요금납부 다양화로 편의성 제공

- 자동이체 납부, 가상계좌 및 위텍스 납부, 신용카드 납부 등

❍ 상하수도요금 문자서비스 알림 서비스 시행

❍ 유선전화를 통한 상하수도요금 이사정산

□ 취약계층 옥내누수 공사 지원

❍ 사업기간: 1∼12월

❍ 소요예산: 6백만 원

❍ 대    상: 중증장애인 및 국민기초생활수급자 등

□ 상하수도요금 체납 징수

❍ 기간/인원: 1.∼12월/ 2개조(2인 1조)

❍ 총 체납액: 338백만원(수용가: 3,412전 / 2023. 10. 23. 기준)

- 3건 이상, 20만원 이상	: 178백만 원(수용가: 307전)

- 50만원 이상	: 133백만 원(수용가: 115전)

- 100만원 이상	:  89백만 원(수용가: 51전)

❍ 주요내용: 납부독려 → 급수정지 예고장 부착 → 급수정지 처분

❍ 기대효과: 건전한 납부문화 정착 및 군 재정여건 개선

2		안정적인 생활용수 공급
		상하수도사업소장 강무성/ 상수도팀장 이정환(☎ 5521)

◈ 법정 수질검사 정기적 실시로 먹는 물 안전성 확보

◈ 노후화된 시설 개선으로 양질의 물 공급

□ 맑은 물 공급을 위한 수질검사 실시

❍ 원수의 수질 감시 및 검사 확대실시

- 지방상수도 원수(호소수) 법정 수질검사: 월 1회(8항목),

분기 1회(38항목)

- 소규모급수시설 원수(호소수) 법정 수질검사: 반기 1회(6항목)

❍ 안정한 정수공정을 위한 수질검사

- 정수장 법정 수질검사 실시: 매일 1회(6항목), 월 1회 (59항목), 주 1회(7항목)

- 급수과정별(분기 1회, 11항목), 수도꼭지(매월 1회, 4항목),

노후 수도관(매월1회 10항목)

- 소규모급수시설 정수 법정 수질검사: 분기 1회(15항목),

연 1회(59항목)

□ 정수장 유지보수 및 안전관리 강화

❍ 정수장 여과사 교체 작업(4개소): 330백만 원

❍ 정수장·수원지 정기점검 및 정밀안전점검(2회): 190백만 원

❍ 상수도 시설물(물탱크) 청소(17개소): 58백만 원

❍ 정수장 완속여과지 여과사 삭취 공사: 143백만 원

❍ 정수장 소형생물 대응체계 구축: 100백만 원(국비50%, 군비50%)

- 대신정수장 완속여과지 여과망 3개소/30백만 원

- 법성정수장: 정수지 유출부 여과망 2개소/40백만 원

- 염산정수장: 배수지 유출부 여과망 2개소/20백만 원

- 소형생물 구축 실시설계 용역 1식/10백만 원

□ 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지·관리

❍ 마을상수도 유지·관리(5개소): 연중

- 상·하낙월도, 송이도, 안마도, 묘량(사동)

❍ 소규모 급수시설 유지·관리(2개소): 연중

- 군남(광암), 대석만도

□ 상수도관망 유지관리

❍ 사업기간	: 1.∼12월

❍ 상수도관망	: L= 837.0㎞, 가압장 35개소, 유량계 26개소

❍ 주요내용	: 누수복구 및 가압장 유지·관리

□ 배수지 유지보수 및 구입설치

❍ 광역1배수지 물탱크 구입 설치(물탱크 500톤 1조): 217백만 원

❍ 광역(1, 2, 3)·상하·오교배수지 유지 및 관리: 연중

□ 신규급수 및 급수폐전 공사

❍ 사업기간: 1∼12월

❍ 사 업 비: 398백만 원

❍ 사 업 량: 신규급수 공사(246개소), 급수폐전 공사(45개소)

❍ 주요내용: 신규급수 및 미사용 급수폐전 공사 시행

3		공공하수처리시설 효율적 운영 및 관리
		상하수도사업소장 강무성/ 하수도운영팀장 박상효(☎ 5509)

◈ 공공하수도 시설의 효율적인 관리로 공공수역 수질오염 예방

◈ 생활하수 적정처리를 위한 시설 개선으로 하수처리장 운영효율 제고

□ 공공수역 수질보전을 위한 효율적인 하수처리장 운영

❍ 공공하수․분뇨 처리시설 수질 분석 및 공정운영

- 사업기간: 연중

- 사 업 비: 1,279백만 원

- 사 업 량: 영광공공하수처리시설 외 35개소

- 주요내용

· 공공하수처리시설 유지보수를 통한 노후 시설개선

· 공공하수처리시설(처리장/중계펌프장) 기술진단 및 정밀점검 실시

· 유입수, 방류수 주기별 법성 수질검사 및 약품구입

❍ 공공하수처리시설 관리대행

- 사업기간: 1.∼12월.

- 사 업 비: 1,247백만 원

- 사 업 량: 홍농·법성하수처리시설 외 34개소

- 주요내용: 하수처리시설 운영 및 유지관리, 법정수질검사

□ 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 기술진단 용역

❍ 용역기간: 1.∼6월.

❍ 대    상: 3개소(영광-7,500톤/일, 홍농·법성-3,450톤/일, 이리-90톤/일)

❍ 용 역 비: 228백만 원

❍ 진단내용: 오염물질 유입특성 및 시설진단, 공정진단, 운영진단 등

❍ 향후계획: 기술진단결과 반영 시설개량 및 2025년도 국비보조금 신청

4		하수처리구역 확대를 통한 생활환경 개선
		상하수도사업소장 강무성/ 하수도시설팀장 심재식(☎ 5286)

◈ 하수처리구역을 확대하여 군민 공중위생 향상 및 생활환경을 개선

◈ 하수의 체계적인 이송･처리로 공공수역 수질오염 예방

□ 홍농법성 하수관로 정비사업

❍ 사업기간: 2021∼2025년(5년)

❍ 사 업 비: 24,006백만 원[국비 15,122(63%), 군비 8,884(37%)]

❍ 사 업 량: 하수관로 17.76㎞, 배수설비 442개소, 맨홀펌프장 19개소 등

❍ 추진실적

- 영광군 하수도정비 기본계획 승인      : 2015. 5.

- 기본 및 실시설계용역 추진            : 2021. 3. ∼ 2022. 11.

- 주민설명회	: 2022. 9. ∼ 10.

- 재원협의 완료	: 2022. 11.

- 행정절차 완료	: 2023. 2.

- 공사(1차분) 추진	: 2023. 3. ∼ 12.

- 공공하수도설치인가	: 2023. 4.

❍ 금후 추진계획

- 공사(2차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 9.

□ 영광읍 하수관로 정비사업(2단계)

❍ 사업기간: 2022∼2026년(5년)

❍ 사 업 비: 24,732백만 원[국비 17,168(69.4%), 군비 7,564(30.6%)]

❍ 사 업 량: 하수관로 24.75㎞, 배수설비 450개소, 맨홀펌프장 19개소 등

❍ 추진실적

- 영광군 하수도정비 기본계획 승인	: 2015. 5.

- 기본 및 실시설계용역 착수	: 2022. 1.

- 재원협의 완료	: 2023. 8.

- 공사발주(조달)	: 2023. 8.

- 행정절차 완료	: 2023. 12.

- 공사(1차분) 착공	: 2023. 12.

❍ 금후 추진계획

- 공사(1차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 6.

- 공사(2차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 9.

□ 농어촌 마을하수도 정비

❍ 영광송림 농어촌 마을하수도 정비사업

- 사업기간: 2019∼2024년(6년)

- 사 업 비: 11,927백만 원[국비 7,573(63.5%), 지방비 4,354(36.5%)]

- 사 업 량: 하수처리시설 110㎥/일, 오수관로 8.36㎞, 배수설비 186개소 등

- 추진사항

·기본 및 실시설계용역 추진	: 2019. 4. ∼ 2021. 10.

·행정절차 완료	: 2021. 10.

·공사(1차분) 추진	: 2021. 12. ∼ 2022. 3.

·공사(2차분) 추진	: 2022. 4. ∼ 2022. 7.

·공사(3차분) 추진	: 2022. 10. ∼ 2023. 3.

·공사(4차분) 추진	: 2023. 1. ∼ 2023. 12.

- 금후계획

·공사(5차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 2024. 9.

❍ 홍농성산 농어촌 마을하수도 정비사업

- 사업기간: 2019∼2024년(6년)

- 사 업 비: 8,319백만 원[국비 5,201(63%), 지방비 3,118(37%)]

- 사 업 량: 하수처리시설 100㎥/일, 오수관로 5.24㎞, 배수설비 195개소 등

- 추진사항

· 기본 및 실시설계용역 추진	: 2019. 4. ∼ 2021. 10.

· 행정절차 완료	: 2021. 10.

· 공사(1차분) 추진	: 2021. 12. ∼ 2022. 3.

· 공사(2차분) 추진	: 2022. 4. ∼ 2022. 7.

·공사(3차분) 추진	: 2022. 10. ∼ 2023. 4.

·공사(4차분) 추진	: 2023. 1. ∼ 2023. 12.

- 금후계획

·공사(5차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 2024. 9.

❍ 염산옥실 농어촌 마을하수도 정비사업

- 사업기간: 2020∼2025년(6년)

- 사 업 비: 9,109백만 원[국비 6,022(66.1%), 지방비 3,087(33.9%)]

- 사 업 량: 하수처리시설 100㎥/일, 오수관로 5.83㎞, 배수설비 136개소 등

- 추진사항

·기본 및 실시설계용역 추진	: 2020. 6. ∼ 2022. 11.

·행정절차 완료	: 2022. 11.

·공사(1차분) 추진	: 2023. 1. ∼ 2023. 5.

·공사(2차분) 추진	: 2023. 3. ∼ 2023. 10.

- 금후계획

·공사(3차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 2024. 9.

❍ 법성덕흥 농어촌 마을하수도 정비사업

- 사업기간: 2021∼2025년(5년)

- 사 업 비: 7,494백만 원[국비 5,153(68.7%), 지방비 2,341(31.3%)]

- 사 업 량: 하수처리시설 50㎥/일, 오수관로 3.81㎞, 배수설비 115개소 등

- 추진실적

·기본 및 실시설계용역 추진	: 2021. 3. ∼ 2022. 12.

·행정절차 완료	: 2023. 3.

·공사(1차분) 추진	: 2023. 5. ∼ 2023. 12.

- 금후계획

·공사(2차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 2024. 9.

❍ 홍농칠곡 농어촌 마을하수도 정비사업

- 사업기간: 2023∼2025년(3년)

- 사 업 비: 6,256백만 원[국비 3,754(60%), 지방비 2,502(40%)]

- 사 업 량: 하수처리시설 90㎥/일, 오수관로 4.94㎞, 배수설비 232개소 등

- 추진실적

·영광군 하수도정비 기본계획 승인	: 2022. 3.

·기본 및 실시설계용역 착수	: 2023. 1.

·주민설명회 개최	: 2023. 5.

·하수처리장 부지 매입 완료	: 2023. 6.

·하수처리공법선정 완료	: 2023. 6.

·행정절차(건설기술심의,재원협의 등)	: 2023. 11. ∼ 2024. 1.

- 금후계획

·공사(1차분) 발주 및 추진	: 2024. 2. ∼ 6.

	2024년 역점시책
	(상하수도사업소)

1		식수 전용 저수지 신설	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 상수도팀장 이정환/ 담당자 고광문(☎ 5522)					□

◈ 식수전용 수원지 신설을 통한 안정적인 수원확보로 가뭄예방과  안정적 수돗물 공급

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2019∼2024년(6년)

❍ 사 업 비: 400억 원[국비 280(70%),도비 36(9%),군비 84(21%)]

❍ 사 업 량: 수원지 신설 2개소(구수1제525천㎥,복룡제182천㎥)

❍ 사업내용

- 수원지 제당축조, 취수탑 건설

- 수원지와 정수장 관로연결 및 진출입로 확보 등

□ 지금까지 추진실적

❍ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2018. 12.∼2022. 3.

❍ 영광군 수도정비 기본계획 부분변경	: 2020. 11. 2.

❍ 소규모환경영향평가용역 협의완료	: 2022. 2. 17.

❍ 건설기술심의 완료	: 2022. 3. 23.

❍ 저수지 신설사업 총괄 및 1차분 착공	: 2022. 10. 31.

❍ 건설사업 관리용역 총괄 계약 및 착수	: 2022. 12. 15.

❍ 임목폐기물처리용역 총괄 계약 및 착수	: 2023. 6. 27.

❍ 건설폐기물처리용역 총괄 계약 및 착수	: 2023. 9. 21.

□ 추진계획

❍ 저수지 신설사업 2차분 착공	: 2024. 1.

❍ 건설사업관리용역 1차분 준공	: 2024. 8.

□ 기대효과

❍ 상습 가뭄지역의 안정적인 상수도 수원확보

❍ 맑은 물 공급으로 주민복지 증진

2		영광 제2정수장 개량	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 상수도팀장 이정환/ 담당자 고광문(☎ 5522)					□

◈ 노후화된 정수장 개량사업을 통해 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급하고 공중위생 향상 및 정주여건을 개선

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2020∼2024년(5년)

❍ 사 업 비: 210억 원[국비 105(50%), 군비 105(50%)]

❍ 사 업 량: 정수장 개량(3,500㎥/일)

❍ 사업내용: 착수정, 침전지, 여과지, 배수지 등 신설

□ 지금까지 추진실적

❍ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2018. 12.∼2019. 12.

❍ 개량공사 총괄 및 1차분 착공	: 2021. 8. 12.

❍ 건설사업 관리용역 총괄 계약 및 착수	: 2021. 8. 18.

❍ 일반수도사업 인가	: 2021. 8. 26.

❍ 군관리계획(변경)결정 및 지형도면 승인 고시	: 2021. 12. 28.

❍ 건설사업 관리용역 1차분 준공	: 2022. 11. 8.

❍ 전기공사 1차분 준공	: 2022. 12. 24.

❍ 폐기물처리용역 1차분 준공	: 2023. 8. 31.

□ 추진계획

❍ 개량사업 1차분 준공                        : 2024. 1.

❍ 개량사업 2차분 준공                        : 2024. 9.

❍ 건설사업관리용역 2차분 준공                : 2024. 10.

□ 기대효과

❍ 선진화된 물 관리체계 구축을 통해 양질의 수돗물을 안정적으로

공급하고 주민 건강 증진 및 정주여건 개선

3		법성정수장 개량사업	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 상수도팀장 이정환/ 담당자 김준형(☎ 5524)				□

◈ 노후화된 정수장 개량사업을 통해 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급하고 공중위생 향상 및 정주여건을 개선

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2024∼2027년(4년)

❍ 사 업 비: 328.6억 원[국비 164.3(50%), 군비 164.3(50%)]

❍ 사 업 량: 정수장 개량(3,500㎥/일)

❍ 사업내용: 착수정, 침전지, 여과지, 배수지 등 신설

□ 지금까지 추진실적

❍ 수도정비 기본계획 반영	: 2016. 2. 19.

❍ 정수장 기술진단 실시	: 2018. 2. 20.

❍ 2020년도 노후상수도정비 사업 신청	: 2020. 1. 28.

❍ 2022년도 노후상수도정비 사업 신청	: 2021. 12. 20.

❍ 2024년도 노후상수도정비 사업 추진 계획	: 2023. 7. 4.

❍ 정수장 정밀기술진단 실시	: 2023. 7. 5.

□ 추진계획

❍ 기본 및 실시설계용역 총괄분 착수	: 2024. 1.

❍ 개량사업 총괄분 발주 및 착공	: 2025. 1.

❍ 개량사업 총괄분 준공	: 2027. 11.

□ 기대효과

❍ 최신 정수처리시스템 및 자동화설비 도입으로 양질의 수돗물을 안정적으로 공급함에 따른 주민보건위생 및 생활 수준 향상 기여

4		영광군 스마트 관망관리 인프라 구축	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 상수도팀장 이정환/ 담당자 임하영(☎ 5523)					□

◈ 수돗물 공급 과정 감시체계를 구축하여 사고 발생시 신속한 대응이 가능하도록 인프라 구축

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022∼2024년(3년)

❍ 사 업 비: 27.6억 원[국비 19.3(70%), 군비 8.3(30%)]

❍ 사 업 량: 스마트 관망관리 인프라 구축 1식

❍ 사업내용: 수질감시·관리, 위기대응, 재발방지, 신뢰제고 인프라 구축

□ 지금까지 추진실적

❍ 스마트 관망관리 기본계획 수립(환경부)	: 2021. 6. 29.

❍ 실시설계용역 착수	: 2022. 3. 22.

❍ 워터코디 물품 구매	: 2022. 12. 28.

❍ 토목, 전기 및 계측 도 계약심사	: 2023. 5. 17.

❍ 공사시행	: 2023. 6. 26.

❍ 실시설계 용역 준공	: 2023. 7. 14.

□ 추진계획

❍ 공사 준공	: 2024. 6.

□ 기대효과

❍ 상수관로의 다양한 환경조건 변화에도 정확하고 안정된 수질측정데이터를 제공하여 지역주민의 공중위생 향상에 기여

5		송이도 공공하수 외 2개소 노후시설 개량사업	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 하수도운영팀장 박상효/ 담당자 정영규(☎ 5289)				□

◈ 20년 이상 노후된 소규모하수처리시설 노후시설 개량으로 효율적인 하수처리시설 운영 및 유지관리로 공공수역의 수질개선

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2024∼2025년(2년)

❍ 사 업 비: 24억 원(국비 14.4 도비 1.9  군비 7.7)

❍ 사 업 량: 송이도 및 남계, 고성 공공하수처리시설 개량사업 1식

❍ 사업내용: 기존 구조물을 활용하는 공법 개량

□ 지금까지 추진실적

❍ 남계 및 고성 공공하수처리시설 기술진단	: 2019. 12. 11.

❍ 송이도 공공하수처리시설 기술진단	: 2022. 09. 07.

❍ 하수도분야 국고보조사업 신청	: 2023. 03. 02.

❍ 하수도분야 국고보조사업 확정	: 2023. 09. 15.

❍ 2023년 3차 자체 지방재정투자사업 투자심사	: 2023. 11. 10.

□ 추진계획

❍ 실시설계 용역 착수 및 착공	: 2024. 1.

❍ 하수처리공법 선정	: 2024. 5.∼6.

❍ 재원협의	: 2024. 7.∼8.

❍ 계약심사 및 일상감사 요청	: 2024. 9.

❍ 공사 발주 및 착공	: 2024. 10.

❍ 공사 준공	: 2025. 12.

□ 기대효과

❍ 노후시설 개량을 통한 하수처리시설의 효율적 운영 및 공공수역의 수질개선으로 군민의 삶의 질 향상

6		영광읍 하수도정비 중점관리지역 정비	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 하수도시설팀장 심재식/ 담당자 류영진(☎ 5287)		□			□

◈ 영광읍 시가지 우수관로를 정비･확충하여 국지성 집중호우 및 우수관로 용량 부족 등으로 인한 침수피해 예방

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2021∼2026년(6년)

❍ 사 업 비: 484억 원[국비 336.5(69.5%), 군비 147.5(30.5%)]

❍ 사 업 량: 우수관로 정비 12.6km 등

❍ 사업내용: 우수관로 개량 및 정비 등

□ 지금까지 추진실적

❍ 하수도정비 중점관리지역 지정	: 2020. 10. 30.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2021. 3. 17.

❍ 기본 및 실시설계용역 보고회(1차)	: 2021. 9. 6.

❍ 하수도정비대책 수립	: 2021. 12. 14.

❍ 기본 및 실시설계용역 보고회(2차)	: 2023. 1. 19.

❍ 지장물 이설 실무협의(유관기관 7개)	: 2023. 4. 12.

❍ 우수Box 단면보수공법 선정	: 2023. 4. 19.

❍ 전라남도 건설기술심의 완료	: 2023. 6. 13.

❍ 도로관리심의(국도22호선)	: 2023. 9. 2.

❍ 재원협의 완료	: 2023. 9. 14.

❍ 공사발주(조달)	: 2023. 9. 20.

❍ 공사(1차분) 착공	: 2023. 12.

□ 추진계획

❍ 공사(1차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 8.

❍ 공사(2차분) 추진	: 2024. 1. ∼ 9.

□ 기대효과

❍ 집중호우 시 우수관로 용량 부족 등으로 인한 침수피해 예방 및 군민 생명과 재산보호

7		영광 공공하수처리시설 증설	공약	공모	행복	신규	계속
		상하수도사업소장 강무성/ 하수도시설팀장 심재식/ 담당자 류영진(☎ 5287)					□

◈ 영광 하수처리구역 확대 및 계획하수량 증가에 따른 공공하수처리시설 용량 증설

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023∼2025년(3년)

❍ 사 업 비: 179.2억 원[국비 107.5(60%), 군비 71.7(40%)]

❍ 사 업 량: 공공하수처리시설 증설 2,500㎥/일(7,500㎥/일→10,000㎥/일)

❍ 사업내용: 공공하수처리시설 증설, 유량조정조 설치 등

□ 지금까지 추진실적

❍ 영광군 하수도정비 기본계획(변경)	: 2022. 3. 2.

❍ 하수도분야 국고보조사업 신청	: 2022. 3. 3.

❍ 하수도분야 국고보조사업 확정	: 2022. 9. 28.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2023. 1. 30.

❍ 하수도기술심의위원회 개최	: 2023. 6. 20.

❍ 하수처리공법 선정	: 2023. 6. 20.

❍ 설계VE, 안전성검토용역 착수	: 2023. 10.

❍ 행정절차(건설기술심의, 재원협의 등)	: 2023. 11. ∼ 2024. 1.

□ 추진계획

❍ 공사(1차분) 발주 및 추진	: 2024. 2. ∼ 7.

□ 기대효과

❍ 영광 하수처리구역 내 생활하수를 처리하여 공중위생 향상 등 정주여건 개선 및 공공수역 수질오염 예방